■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(기획심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 4. 18.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) ㈜동문건설
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 중동
	지번 : 1732-3		관련지번
	대지면적:20,161.7㎡		용도지역: 도시지역
건축물현황	건축면적: 914.39㎡		건폐율:4.5352			층수 지상 : 지상2층
	주용도:가설건축물(견본주택)		구조:일반철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:		용적률:56			연면적 합계: 1,612.07㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	안전에 유의하여 작업 진행하여 주시기 바람. 공사 환경관리(분진, 소음 등)관리에 유의하여 주시기 바람. 계획에 맞춰 안전한 건축물 해체가 진행될 수 있도록 철저한 관리가 필요함. 본 구조물 해체는 진동 및 소음이 적은 Crusher압쇄 공법을 채용하고 있으며, 경제성, 공기, 안전성 측면에서 적절한 것으로 판단됨. 가설비계 설치 및 해체시에는 해체계획에 준하여 작업함으로서 안전사고를 방지해야함. 철골부재 해체 시 전도, 인양자재 낙하 등의 발생위험과 낙하위험 등 재해예방을 위한 대책을 철저하게 준수할 것. 공사 차량 통행에 따른 주변 안전조치와 더불어 해체공사 공정별 위험요인에 따른 적절한 대처방안 등도 숙지하고 준수할 것. 현장 좌측면 가공고압선 약 10m 내에 위치하므로 건물 전도시 위험반경이므로 한국전력공사와 협의하여 인입선 철거 등 다른 보호조치 계획 기재하시기 바람. 석면조사 결과 무검출로 나왔다 해도 해체계획서내에 조사결과 입력하시기 바람. 장비 탑재층에 인양거리 및 장비 제원 기입되어있는 단면도, 인양되는 위치 등 평면도 제시하시기 바람. 해당 현장의 정면측은 보행자 거리와 밀접하므로 낙하물 방지망 설치하시기 바람. 가설비계 구조검토서 별도제출 하시기 바람. 해체순서별 도면 작성하시고 해체순서별 구조설계 도서는 A3이상 도면으로 현장에 비치하시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	건축물 해체계획서 작성 매뉴얼 표준서식을 참조해 양식 추가하여 현장에서 사용하시기 바람.(개인보호구 지급대장, 안전교육일지, 안전교육 참여자 명단, 안전교육 사진) 해당 건물은 고소에서 철골 구조물 절단 시 불꽃 비산방지 철저히 하시고 이에 관하여 소화기 비치 구축하시어 도면화 하시기 바람. 구조안전검토서 및 비계구조계산서를 제출하시기 바람. 지하매설물 관련 해당 관리기관 발급 “해당없음”확인서 첨부 필요 대상 건축물의 2층 바닥은 철골조, 데크플레이트/콘크리트 T100mm인데 해체계획에 해당 콘크리트 철거 상세 내용 누락

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]