전라남도고시 제2016-326호

공유수면매립 실시계획 변경승인 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」제38조제1항 후단의 규정에 의하여 다음과 같이 공유수면매립 실시계획 변경승인 하였기에 동법 제38조제4항의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2016. 09. 01.

전 라 남 도 지 사

1. 당초 실시계획 인가일 : 2013. 01. 10.

변경 실시계획 인가일 : 2016. 09. 01.

2. 면허를 받은 자의 성명·주소

가. 성 명 : 광양시장

나. 주 소 : 전남 광양시 시청로 33(중동, 광양시청)

3. 매립목적 : 도시용지조성(공공 및 주택시설)

4. 매립공사 구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 전남 광양시 마동 262-1 지선

나. 면 적 : 86,843㎡

5. 매립공사의 시행기간

가. 당 초 : 2013. 09. ~ 2016. 08.

나. 변 경 : 2013. 09. 01. ~ 2017. 09. 30.

6. 실시계획의 변경사항 및 변경사유

가. 변경사항 : 13개월 연장

나. 변경사유 : 매립 마무리 및 준공검사 준비를 위해 매립실시계획 기간 연장

부      칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.