LF스퀘어 테라스몰 광양점

지역협력사업 이행실적 평가․점검결과

광   양   시

(지역경제과)

목   차

Ⅰ. 점검 개요	3

Ⅱ. 주요 점검 내용	3

Ⅲ. 점검 결과	4

* 총 평	4

* 점검결과 이행 권고 사항	5

* 점검결과 조치 계획	7

Ⅳ. 세부 이행실적 평가 점검 결과	8

* 대규모 투자 유치 사업	8

* 지역경제 활성화 방안	10

* 지역상인 상생 협력 방안	12

* 지역 미래가치 창출 방안	14

* 지역사회 공헌 방안	16

LF스퀘어 테라스몰 광양점

지역협력사업 이행실적 평가․점검 결과

□ LF스퀘어 테라스몰 광양점이 제출한 지역협력계획의 성실한 이행으로 기업과 지역이 상생발전 할 수 있도록 지원하고

□ 지역협력계획 이행 실적을 정기적으로 평가․점검하여 지역 영세 상인 보호 및 경제 활성화에 기여

추  진  배 경

Ⅰ. 점검 개요

□ 관련근거

• 유통산업발전법 제8조의2

- 지역협력계획서의 내용 및 이행실적 평가․점검

• 광양시 대형 유통기업 지역기여 권고 조례

- 실천협약 및 이행 점검

□ 점검시기 : 2017. 6. 1. ~ 6. 30.

□ 점검방법 : 서면점검, 점포 서류점검, 현장점검

Ⅱ. 주요 점검내용 : 5개분야 22개 사업

□ 대규모 투자 유치 분야 : 4개 사업

□ 지역경제 활성화 분야 : 5개 사업

□ 지역상인 상생협력 분야 : 4개 사업

□ 지역 미래가치 창출 분야 : 6개 사업

□ 지역 사회 공헌 분야 : 3개 사업

Ⅲ. 점검 결과

□ 총 평

• 5개분야 22개 세부 사업을 점검한 결과 6개 사업은 단기 사업으로 이행 완료 되었으며, 13개 사업은 장기 계속사업으로 이행 중에 있고, 3개 사업은 아직 시기가 도래되지 않아 추진 준비 중에 있음.

• 대규모 투자 유치 사업 분야에서 골프장 및 호텔 건립은 대행 용역사를 조속히 선정하여 조성계획 승인 등 행정절차를 신속히 진행해야 할 것으로 판단되며, 예구 근린공원 조성은 구체적 추진 방안을 우리시와 별도로 협의해야 할 것으로 사료되며, 현지법인화는 자본 확충 및 차입금 규모를 줄여서 2021년까지 완료토록 권고코자 함.

• 지역경제 활성화 방안 분야는 대부분 순조롭게 추진되고 있으나, 청년 창업을 위한 푸드트럭 사업이 식음 사업자들의 반발로 이행이 되지 않고 있어 연내 이행토록 권고하고, 지역민 일자리 창출이 계획대비 78.7% 달성되어 조속히 100% 달성토록 권고코자 함.

• 지역상인 상생 협력 방안 분야도 순조롭게 추진되고 있으나, 지역 패션 상인 중 미 입점자들과 소통이 미흡하므로 정기적 간담회 개최가 필요할 것으로 판단됨.

• 지역 미래가치 창출 방안 분야는 지역 대표 먹거리 산업 육성을 위하여 대표 맛집 및 특산품 입점을 지속 추진하고 지역 먹거리 축제를 연 2회 시행토록 촉구코자 함.

• 지역사회 공헌 방안 분야는 이행 실적이 비교적 저조한 편으로, 봉사활동 참여인원과 예산 집행을 확대해야 할 것으로 판단되며, 관외거주자 160명 중 20여명만 전입되어 연내 70%이상 관내 거주토록 해야 할 것으로 사료되며, 직원 휴게 편의시설 월 매출액의 5% 광양 사랑나눔복지재단 출연 약속을 지키도록 권고하는 한편 비영리 수익 사업이므로 수수료를 면제하는 방안을 적극 검토하도록 권고코자 함.

□ 점검결과 이행 권고 사항

• 골프장 조성 사업

- 대행 용역사 선정 부지 매입 및 조성계획 승인 행정절차 즉시 추진

• 호텔 건립 사업

- 대행 용역사 선정 부지 매입 및 조성계획 승인 행정절차 즉시 추진

• 현지 법인화

- 자본 확충 및 차입금 규모를 줄여 나가는 경영을 하여 현지 법인화 2021까지 추진

• 예구 근린공원 조성(주차장 확보)

- 2016. 12. 29. 체결한 지역협력계획 협약서에 따라 행∙재정적 지원 방안 등 구체적 추진 방안 광양시와 별도 협의 추진

• 지역 일자리 창출

- 지역민 채용 계획 미달 인원(149명) 연내 이행

• 청년 취약계층 창업 지원

- 지역민 프리마켓 장소 유동인구가 많은 위치 제공(외부 셀러들과 동등하게)하여 수익 창출

- 청년 창업을 위한 푸드트럭 연내 이행

• 광양시민 창업기회 제공

- 없음(계획 72명보다 많은 117명 창업 163% 달성)

• 비즈니스 교육 프로그램 운영

- 2017년 하반기 시행 예정으로 세부 추진계획 수립 시행 철저(예비창업자 등 교육 대상자 선발을 위한 사전 홍보)

• 점포 시설관리 용역 지역 업체 선정

- 없음(서광양기업 선정 운영, 90명 채용, 용역비 24억원)

• 지역 패션상인 우선 입점 지원

- 미 입점 관내 점주 소통 미흡 정기적 간담회 개최

• 소상공인 중소기업 전시 판매 공간 제공

- 사전 홍보 및 체계적인 시스템으로 참여 업체 확대

• 지역 우수상가 및 전통시장 제휴

- 2017년 하반기부터 시행으로 세부계획 수립 등 철저한 사전 준비로 효과 극대화

• 지역 중소상인 대출 지원

- 대출 지원 사항 적극적인 홍보로 많은 혜택을 받을 수 있도록 추진

• 지역 대표 먹거리 산업 육성

- 대표 맛집 및 특산품 개발 연내 입점 추진

- 지역 먹거리 축제 연 2회 연내 시행

• 로컬 푸드 마켓 오픈

- 로컬푸드 매장의 성격에 맞도록 운영(과자, 아이스크림, 음료 판매 최소화)

• 산학협력 활동

- 패션 유통, 마케팅, 취업, 창업부문 산학협력 교육프로그램 운영(반기별)

• 잡월드 체험 프로그램 운영

- 2018년 본격 시행 대비 연내 세부 추진계획 수립 홍보

• 광양시 홍보관 설치

- 공공부문 지역협력 사업이므로 수수료 면제 검토

• 외국인 관광객 쇼핑 인프라 구축

- 안내 간판 등 외국어 병행 표기

• 봉사활동 프로그램 운영

- 봉사활동 참여인원 확대 및 예산 집행 현황 제출

• 광양시민 되기 운동

- 연내 70%이상 전입 유도 및 분기별 추진 실적 제출

• 지역 비영리 수익 사업 지원

- 직원 휴게 편의시설 월 매출액의 5% 광양 사랑나눔복지재단 출연

- 비영리 수익사업 이므로 수수료 면제 검토

□ 점검결과 조치 계획

• 우리시 홈페이지에 점검 결과 공개 및 보도자료 배포

• LF측에 미비사항 즉시 개선권고