정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	지역경제과	②담당자 (연락처)	과 장 조춘규 담당자 김경수 (797-2359)
③정책사업명	광양5일시장 아케이드 설치사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤사업기간	2015. 12. 24. ~ 2016. 6. 30.
⑥주요내용	□ 사업 필요성 ○ ’13년 시설현대화사업 이후 아케이드가 설치되지 않아 상인들이 천막, 파라솔 등을 설치하여 시장 미관 저해 ○ 햇빛 등 비가림으로 상인과 이용객들의 편의를 도모하고 쇼핑환경 개선으로 전통시장 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 사 업 량 : 5,200㎡(1차분:2,420 2차분 : 2,780 ○ 총사업비 : 54억원(국비20, 시비34) ○ 사업기간 : 2015.12~2017.2 □ 추진사항 ○ 아케이드 설치사업 실시설계 완료 : 2014. 12. 5. ○ 아케이드 설치 조달구매 계약통보(조달청⇾市(시)) : 2015. 12. 7 ○ 아케이드 설치 부대공사 착수 : 2015. 12. 24. □ 추진계획 ○ 아케이드 철골 기둥 및 주행보 설치 완료 : 2016. 4. ○ 아케이드 막구조 설치 완료 : 2016. 5. ○ 아케이드 부대공사(건축․전기․소방) 준공 : 2016. 6. 30.

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	지역경제과	②담당자 (연락처)	과 장 조춘규 담당자 박병인 (797-2811)
③정책사업명	광영상설시장 시설현대화사업(증축)
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2016. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
⑥주요내용	□ 사업 필요성 ○ 2009년에 시설현대화사업을 추진하였으나, 점포면적 부족과 주차시설 미비로 시장 활성화 장애요인으로 작용 ○ 광영․의암도시개발사업 추진 등 시장 수요에 대비하여 시장증설 및 주차장 확보가 필요한 실정임. □ 사업 개요 ○ 사 업 량 : 시장 증축 및 주차장 확장 ○ 사 업 비 : 1,434백만원(국비1,100, 시비334) ○ 사업기간 : 2016. 1.~2018. 12 □ 추진사항 ○ 공유재산관리관리계획 의회 숭인(본예산) 요청 : 2015. 12.-부결 ○ 2016년 본예산 국비 확보(600백만원) : 2016. 1. ○ 2017년 시설현대화사업 계속사업(10억) 신청 : 2016. 2. 19. ○ 2017년 현대화사업 계속사업 현지 실태 조사 : 2016. 3. 15. □ 추진계획 ○ 공유재산관리관리계획 의회 승인 요청 : 2016. 7 ○ 국비 확보에 따른 매칭 사업비 확보 : 2016. 8. ~ ○ 토지 보상, 건축물 철거 및 설계 등 : 2016. 10. ~ 2017. 6