정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	안전총괄과	②담당자 (연락처)	과 장 박형운 담당자 최종배 (797-2267)
③정책사업명	광양 용강 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2015.4. ~ 2016.10.
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 광양IC와 신시가지 연결도로변 연접으로 낙석 및 사면붕괴 발생시 인명피해 및 차량파손 우려가 큰지역으로 빠른 시일내 정비가 필요함. □ 사업개요 □ 추진기간 : 2015. 4. ~ 2016. 10. □ 총사업비 : 2,400백만원 □ 주요내용 - 흙깎기 V=26,898㎡, 비탈면녹화 8,609㎡, L형측구 L=240m, 소단측구 L=180m, 산마루 측구 L=180m □ 추진실적 및 계획 □ 2009. 11. 24. : 급경사지 붕괴위험지역 지정 □ 2015. 8. 4. : 급경사지 정비사업 교부결정 □ 2015. 11. 24. : 전라남도 계약심의 완료 □ 2015. 12. 14. : 공사 착공 □ 2016. 10. 08. : 공사 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	안전총괄과	②담당자 (연락처)	과 장 박형운 담당자 최종배 (797-2267)
③정책사업명	진상 회두 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤사업기간	2015.4. ~ 2017.4.
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 인공 비탈면으로 해빙기 및 우수기에 여러차례에 걸쳐 토사유실 및 낙석붕괴위험이 있고 7월 중순에서 8월중순까지 약 4만명의 피서객이 방문하는 지역임 □ 급경사지 붕괴 발생시 교통두절은 물론 인명피해우려가 큰 지역으로 사전 정비 필요 □ 사업개요 □ 추진기간 : 2015. 4. ~ 2017. 4. □ 총사업비 : 4,000백만원 □ 주요내용 - 흙깎기 V=43,280㎥, 스팅앙커(4~6M) 1,324공, 어스앙커(9.5m) 263공, L형옹벽 측구 L=417.8m, U형측구 L=417.8m, 아스콘포장 A=5,312㎡ □ 추진실적 및 계획 □ 2015. 5. 28. : 급경사지 붕괴위험지역 지정 고시 □ 2015. 8. 28. : 실시설계용역 착공 □ 2015. 10. 31. : 손실보상금 결정 □ 2016. 3. 17. : 전라남도 사전설계검토 완료 □ 2016. 4. 1. : 전라남도 계약심사 완료 □ 2016. 4. 7. : 계약 의뢰 □ 2016. 4. ~ 2017. 4. : 공사 착공 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	안전총괄과	②담당자 (연락처)	과 장 박형운 담당자 최종배 (797-2267)
③정책사업명	골약 도이 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤사업기간	2015.7. ~ 2017.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 해빙기 및 우수기에 토사유실 및 낙석붕괴 등의 피해가 우려되는 지역으로 인명피해 우려됨 □ 사전 정비 및 항구적인 정비로 인명과 재산피해 예방 □ 사업개요 □ 추진기간 : 2015. 7. ~ 2017. 12. □ 총사업비 : 4,000백만원 □ 주요내용 : 사면정비 A=32,091㎡ □ 추진실적 및 계획 □ 2015. 9. 24. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시 □ 2016. 1. 22. : 지질조사 용역 착공 □ 2016. 3. 9. : 실시설계용역 착공 □ 2016. 8. : 전라남도 사전설계검토 □ 2016. 12. : 전라남도 계약심사 □ 2017. 1. ~ 12. : 공사착공 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	안전총괄과	②담당자 (연락처)	과 장 박형운 담당자 김낙균 (797-3266)
③정책사업명	중마 금광･성호 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤사업기간	2015. 7.~2018. 6.
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 일 통행차량이 약 24,000대로 급경사지 붕괴 발생시 교통두절은 물론 인명피해우려가 큰 지역임 □ 사전 정비 및 항구적인 피해방지 대책으로 안전도시 구축 □ 사업개요 □ 추진기간 : 2015. 7. ~ 2018. 6. □ 총사업비 : 8,000백만원 □ 주요내용 : 사면정비 A=39,919㎡ □ 추진실적 및 계획 □ 2015. 9. 24. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시 □ 2015. 9. ~ 11. : 실시설계 용역 추진 □ 2016. 6. : 토지보상 실시 □ 2016. 8. : 전라남도 사전설계검토 추진 □ 2016. 12. : 전라남도 계약심사 추진 □ 2017. 1. ~ 2018. 6. : 공사 착공 및 준공