정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	과 장 이형철 담당자 최형욱 (797-2748)
③정책사업명	신덕지구(구역사~신역사) 진입도로 개설공사
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2014. 2. ~ 2017. 2.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 구역사~신역사간 연결도로 조기 개설로 주변지역 개발촉진 및 신역사 이용자 편익 도모 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2014. 2. ~ 2017. 2. ○ 총사업비 : 35,003백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=1.26km, B=30.0m(교량 L=190m) □ 추진실적 및 계획 ○ 2013. 5. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ○ 2013. 6 ~2014. 1 : 편입토지 및 지장물 보상협의 ○ 2014. 2.~2016. 3 : 1~2차분 공사 추진(토공, 배수공, 교량공 등) ○ 2016. 3. ~ 2017. 2. : 잔여분 공사 추진 ＊공정률 : 87%

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	과 장 이형철 담당자 최형욱 (797-2748)
③정책사업명	금광@~성황간 도시계획도로(대로2-27) 개설공사
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2015. 4. ~ 2020. 12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 중마 도심지구와 성황․도이지구간 간선도로망 확충으로 주변지역 개발촉진 ○ 성황․도이지구 도시개발사업과 연계추진으로 사업 효율성 증대 및 예산절감 도모 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2015. 3. ~ 2020. 12. ○ 총사업비 : 470억원 ○ 주요내용 - 본선부 L=0.79km, B=30.0m(터널 L=160m, 교량 L=40m) - 연결로 L=1.05km, B=5.5m(터널 L=186m) □ 추진실적 및 계획 ○ 2015. 4. : 실시설계 용역 착수 ○ 2016. 1. : 실시설계 경제성검토(VE) ○ 2016. 2. : 전라남도 지방건설기술심의 ○ 2016. 4. : 조달청 공사원가사전검토 및 계약의뢰 ○ 2016. 5.~ 2020. 12. : 공사추진

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	과 장 이형철 담당자 김종서 (797-2825)
③정책사업명	농어촌도로204호선(하천리) 확포장공사
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2015. 8. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 다압면 지방도 861호선에서 하천마을로 연결되는 농어촌도로 204호선으로서 굴곡이 심하고, 노폭이 협소하여 교통사고 위험이 상존하여 지역주민들이 생활불편을 겪고 있는 실정임 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2015. 8. ~ 2018. 12. ○ 총사업비 : 2,800백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=1.9km, B=6.5m □ 추진실적 및 계획 ○ 2015. 4. : 지방재정투자심사 ○ 2015. 8. : 실시설계 용역 착수 ○ 2015. 10. : 주민설명회 ○ 2016. 1. : 소규모환경영향평가 협의 ○ 2016. 3. : 사전재해영향성검토 협의 ○ 2016. 5.~12. : 편입토지 및 지장물 보상협의 ○ 2017. 1 ~. : 공사추진