정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	과 장 오태영 담당자 서고은 (797-3426)
③정책사업명	2030 광양 도시기본계획 수립
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2013.6 ∼ 2016.6
⑥주요내용	□ 추진배경 ○「국토계획법」에 따라 5년마다 도시기본계획의 타당성 등을 재검토 □ 사업개요 ○ 위 치 : 광양시 관할 행정구역 ○ 면 적 : 497.6㎢(육지부 460.0, 해면부 37.6) ○ 사업기간 : 2013.6 ∼ 2016.6 ○ 사 업 비 : 626백만원(용역비) ○ 주요내용 ·- 인구 30만 계획, 생활권별 구상, 4대계곡 주변 성장관리방안 □ 추진실적 및 계획 ○ 2015. 10. 13, 15. : 주민공청회, 시의회 의견청취 ○ 2015. 11. 20. : 광양시 도시계획위원회 자문 ○ 2015. 10.∼ 2016. 1. : 토지적성평가 보전대상 판정기준 검토 및 시뮬레이션 수행 ○ 2016. 2. 15. : 광양시 도시계획위원회 심의 ○ 2016. 2. 17. : 토지적성평가 검증 의뢰(LH공사) ○ 2016. 3. 3. : 국토계획평가 사전 자문(국토연구원) 의뢰 ○ 2016. 3. 3. ~ 17. : 기본계획 승인 절차 협의(4회) ○ 2016. 3. 25. : 2030 광양 도시기본계획 승인 신청(전남도) ○ 2016. 4. : 전라남도 관계기관(부서) 협의 ○ 2016. 6. : 2030 광양 도시기본계획 승인

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	과 장 오태영 담당자 서고은 (797-3426)
③정책사업명	2020 광양 도시관리계획 수립
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2014.6 ∼ 2016.12
⑥주요내용	□ 추진배경 ○「국토계획법」에 따라 5년마다 도시관리계획의 타당성 등을 재검토 □ 사업개요 ○ 위 치 : 광양시 관할 행정구역 ○ 면 적 : 497.6㎢(육지부 460.0, 해면부 37.6) ○ 사업기간 : 2014.6 ∼ 2016.12 ○ 사 업 비 : 1,296백만원(용역비) ○ 주요내용 - 용도지역, 용도지구, 용도구역, 도시계획시설 검토 □ 추진실적 및 계획 ○ 2015. 12. 30. : 단계별 집행계획 시의회 의견청취 및 공고 ○ 2016. 1. 28. ∼ 2. 12. : 12개 읍·면·동 주민설명회 실시 - 토지의 이용 및 불합리한 도시계획시설 등 주민의견 청취 ○ 2016. 3.∼ 7. : 용도지역, 지구, 미집행 도시계획시설 정비 ○ 2016. 8. : 도시관리계획(안) 입안 ○ 2016. 9. : 주민 및 시의회 의견청취, 시 관계기관, 실과 협의 ○ 2016. 10. : 시 도시계획위원회 심의 및 자문 ○ 2016. 11. : 2020 광양 도시관리계획 승인 신청(전남도) ○ 2016. 12. : 도 도시계획위원회 심의

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	과 장 오태영 담당자 서고은 (797-3426)
③정책사업명	성황근린공원조성사업
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2015.4 ∼ 2020. 12
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 중마동 주거중심지(향후10만명)와 광양항 배후단지 인근에 위치한 근린 공원을 조성 시민의 심신단련과 운동.휴식공간 제공으로 삶의 질 향상 □ 사업개요 ○ 위 치 : 도이동 산 3번지 일원 ○ 사 업 량 : A=478,140㎡ (구역계 변경 525,398㎡) ○ 사업기간 : 2015. 4. ~ 2020. 12. ○ 사 업 비 : 49,350백만원(용역비 500, 보상비 36,960, 공사비 11,890) ○ 주요시설 : 다목적문화체육관, 야구장, 어린이교통체험장, 주차장 1,200면 등 □ 추진실적 및 계획 ○ 2015. 4. ∼ 2016. 8. : 조성계획 변경 및 실시설계 시행 ○ 2016. 1. 29. : 주민설명회 개최 ○ 2016. 2. 1. ∼ 2. 29. : 토지 및 물건조사 ○ 2016. 3. 1. ∼ 3. 14. : 보상계획 열람공고 ○ 2016. 5. ∼ 2017. 12. : 손실보상 협의 ○ 2018. 1. ∼ 2020. 12. : 공원조성사업 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	과 장 오태영 담당자 장한용 (797-3445)
③정책사업명	광양읍 도시재생사업
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2016. 1. ~ 2020.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 광양읍 원도심 인구의 급격한 감소와 노후 주택 및 공가․ 폐가․빈점포가 지속적으로 발생하여 공동화 쇠퇴화가 심각한 실정에 있어 ○ 숲․나대지․공폐가․한옥 등 자원의 재발견을 통해 경제적․ 사회적․물리적․환경적으로 활성화하기 위함. □ 사업개요 ○ 위 치 : 광양읍 원도심 일원 ○ 사 업 량 : 주거재생, 녹색재생, 상가재생, 역사재생 ○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000 시비 5,000) □ 세부추진 실적 및 금후계획 ○ 2014. 10. 18. : 전략 및 활성화계획수립 용역 착수 ○ 2014. 11. ~ 12. : 도시재생대학 운영, 도시재생조례 제정 ○ 2015. 4. 29. : 도시재생사업 공모 신청(市→국토교통부) ○ 2015. 5. : 1차 서면평가 및 2차 발표평가(국토교통부) ○ 2015. 9. 14. : 광양읍 도시재생사업 확정 ○ 2015. 10. ~ 2016. 9. : 도시재생활성화계획수립 ○ 2016. 10. : 도시재생활성화계획 승인(전라남도, 국토교통부) ○ 2016. 10. ~ 2017. 2. : 실시설계용역 추진 ○ 2017. 2. ~ 2020. 12. : 사업추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016-00

담당부서

작성자

과  장 오태영

담당자 김현미

(797-2168)

정 책 명

섬진마을 경관개선 사업

사업개요

및

추진경과

□ 추진배경

○ 우리 시의 제일 관광지인 매력적인 매화마을 경관 형성으로 지역경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2014. 2. ∼ 2015. 12.

○ 총사업비 : 1,600백만원(국비 1,120   시비 480)

○ 주요내용

- 경관광장 조성 : A = 7,477㎡

- 돌 담 설 치 : L=362.0m H=0.8m

- 벽 화 구 성 : 13개소

- 조형물 설치 :  9개소

□ 추진실적 및 계획

○ 2013.  1. 18. : 신규사업 신청(농림축산식품부)

○ 2013. 10. 30. : 국비지원대상 선정(농림축산식품부)

○ 2014.  2. 18. ~ 2015. 2. 11. : 실시설계 용역 시행

○ 2014.  7.  2. : 비 관리청 공사시행 허가(지방도861호선)

○ 2014.  9.  3. : 문화재 형상변경 협의

○ 2015.  2.  5. : 계약심사(전라남도)

○ 2015.  4. 13. : 계약체결【죽암건설(주)】

○ 2015.  4. 17. : 공사착공

○ 2015. 12. 23. : 공사준공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설8급 김현미

- 최종 결재자 : 시장 정현복

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시장	이성웅	2급	‘13.1.1～‘14.6.30	시 업무전반
시장	정현복	2급	‘14.7.1～‘15.12.23	시 업무전반
부시장	윤인휴	3급	‘13.1.1～‘14.6.30	시 업무전반
부시장	임영주	3급	‘14.7.1～‘15.7.20	시 업무전반
부시장	신태욱	3급	‘14.7.21～‘15.12.23	시 업무전반
국장	이상표	4급	‘13.1.1~‘14.2.6	안전도시국 업무전반
국장	이노철	4급	‘14.2.7~‘15.2.6	안전도시국 업무전반
국장	김석환	4급	‘15.7.7~12.31	안전도시국 업무전반
국장	정남택	4급	‘13.1.1~‘14.2.6	도시과 업무 전반
과장	황형구	5급	‘14.2.7~‘15.2.9	도시과 업무 전반
과장	김석환	5급	‘15.2.10~7.6	도시과 업무 전반
과장	오태영	5급	‘15.7.7~12.23	도시과 업무 전반
팀장	문성기	6급	‘13.1.1~‘14.2.6	사업신청 업무전반
팀장	김세화	6급	‘14.2.7~‘15.12.23	설계용역, 공사 추진 업무전반
담당	김현미	8급	‘13.1.1～4.20	신규사업신청
			‘14.10.29～‘15.2.10	설계용역 추진
담당	윤미순	7급	‘13.4.21～‘14.2.6	설계용역 발주
담당	서고은	7급	‘14.2.7~4.1	설계용역 착수
담당	이돈국	8급	‘14.4.1～10.28.	설계용역 완료
담당	원용해	6급	‘15.2.11～12.23.	공사 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

- 설계자 : 한빛기술단, 진화기술공사 031-388-9442

- 시공자 : 죽암건설(주) 김종욱 061-740-0700