정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	환경관리센터 하수과	②담당자 (연락처)	과 장 황형구 담당자 안효상 (797-2821)
③정책사업명	진월 대리･가길 농어촌마을하수도 설치사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤사업기간	2016. 3. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 섬진강 수계에 위치한 지역으로 오염원 관리 일원화를 통한 섬진강 하천수질 개선 □ 하천 및 해양수질오염 예방과 지역 주민의 하수행정 신뢰 및 보건 위생 향상에 기여 □ 사업개요 □ 위 치 : 진월면 대리·가길 마을 □ 사업량 : 처리장 70㎥/일, 관거 L=13.2km, 배수설비 131가구 □ 사업비 : 2,700백만원(국비 1,890, 시비 810) □ 추진실적 및 계획 □ 2015. 1. : 광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 □ 2016. 3. : 실시설계용역 착수 및 2017년도 하수도 분야 국비 지원사업 신청 □ 2016. 8. : 하수처리장 부지 매입 및 공법선정 위원회 개최 □ 2016. 10. : 설계자문(전남도) 및 재원협의(영산강유역환경청) □ 2016. 11. : 계약심사 및 공공하수도설치 인가 협의(전남도) □ 2017. 2. : 총괄 및 1차분 공사 착수 □ 2018. 12. : 2차분 공사 추진 및 총괄 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	하수처리과 (광양하수처리장)	②담당자 (연락처)	과 장 강병길 담당자 손애희 (797-3284)
③정책사업명	광양하수처리장 개량공사
④선정기준	10억 이상의 건설사업	⑤사업기간	2016.1.~2017.12.
⑥주요내용	□ 사업목적 □ 강우시 고농도의 초기우수 처리 가능 □ 안정적이고 균등한 유입수 분배로 수처리 효율 향상 □ 광양처리장 인근 광양만의 수질안정과 수생태계 보호 □ 사업개요 □ 사업위치 : 광양읍 소미길 46-47(광양처리장내) □ 사 업 량 : 저류시설 6,000㎥ (3,000㎥×2지) 외 □ 사 업 비 : 3,816백만원(국비50%, 도비5%, 시45%) ㆍ 2016년 사업비 : 1,000백만원 □ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12. □ 추진실적 □ 2015. 3. : 광양하수처리장 유량조정조 신설 타당성 조사 □ 2015. 8. : 광양하수처리장 개량사업 국비 확보(19억) □ 2016. 1. : 광양개량사업 기본 및 실시설계 용역 입찰 □ 2016. 3. : 용역 추진(부지 측량 및 지질 조사 추진) ○ 추진계획 □ 2016. 3 ~ 8. : 환경부 재원협의, 전남도 변경인가 및 실시설계 완료 □ 2016. 9 ~ 10. : 공사 입찰 및 착공 □ 2017. 12. : 준공