정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	시설관리과	②담당자 (연락처)	과 장 정 기 담당자 이근중 (797-2915)
③정책사업명	고효율 에너지절약형 LED도로조명 교체
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2016~2018
⑥주요내용	□ 추진배경 □ 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산자부 2015-158)」에 의거 공공기관은 LED조명 교체 의무화 □ 정부의 지자체 LED조명 교체 금융활용모델 전파계획과 지역에너지 절약사업 운용지침에 따라 2016년 국비 4억원 확보 □ 사업개요 □ 추진기간 : 2016.04. ~ 2018.12. □ 총사업비 : 5,090백만원 □ 주요내용 - 2016년 확보예산 8억원(국비4, 시비4)과 민간금융을 연계하여 가로등 2,500여 등을 시범사업으로 교체 - 2017년 국비 11억원을 우선 확보하여 나머지 가로·보안등 6,500여 등을 2017년까지 전부 교체 → 2018년부터는 연간 930백만원의 전력요금과 유지보수비용 절감 가능 - 2018년 국비 6억원을 추가로 확보하여 공원등과 터널등을 모두 교체하고 우리 시 LED조명등 교체사업 완료 □ 추진실적 및 계획 □ 2015.10. : 지역에너지절약 LED금융연계사업 선정(국비4억) □ 2016.04. : 위탁기관 협약체결 □ 2016.05. : 사업타당성 분석 및 실시설계추진 □ 2016.05. : 입찰공고 및 계약 □ 2016.05. ~ 9. : 1차사업 완료 □ 2017.09. : 2차사업 추진 및 완료 □ 2018.09. : 3차사업 완료(공원 및 터널등)