정책실명제 중점관리사업 사업내역서

①사업부서	체육과	② 담당자 (전화번호)	과 장 김경철 주무관 문봉삼 (797-2416)
③정책사업명	(2017-3) 성황 다목적 복합체육관 건립
④선정기준	총사업비 10억원이상 예산사업	⑤사업기간	2016. ~ 2018.
⑥주요내용	◦ 추진배경 - 최근 트렌드에 부합하는 특화된 체육·문화공간을 조성하여 체육 및 문화활동 참여기회 확대로 신체적, 정신적 활력 증진을 통해 삶의 질 향상 ◦ 추진기간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월(3년) ◦ 총사업비 : 25,000백만원(국비 30%, 시비 70%) ◦ 주요내용 - 위 치 : 도이동 267-1번지 일원(성황근린공원 내) - 연 면 적 : 18,350㎡ ◦ 건축면적 : 4,967㎡ - 건립규모 : 다목적 복합체육관 1동(지하 1층, 지상 4층) ◦ 주요시설 - 체육시설(주체육관, 배드민턴장, 탁구장, 스쿼시장 등) - 문화 ․ 편의시설(다목적실, 문화교실, 세미나실, 어린이놀이방 등) ◦ 추진경과 및 계획 - 2015. 5. ~ 2015. 10. : 다목적 복합체육관 등 체육시설 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진 - 2015. 11. : 지방재정 투자심사 완료(행자부) - 2016. 2. : 공공시설 설치계획 승인 - 2016. 6. ~ 9. : 건축설계공모 공고 및 당선작 결정 - 2016. 12. ~ 2017. 6. : 건축설계용역 완료 - 2017. 6. : 계약심사 의뢰 및 공사 발주 - 2017. 7. ~ 2018. 12. : 공사 착공 및 준공