정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교육청소년과	② 담당자 (전화번호)	과 장 이병환 팀 장 김상희 (797-2318)
③ 정책사업명	(2017-12) 도서관 건립공사(광양 희망 ․ 용강)
④ 선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤ 사업기간	2015 ~ 2017
⑥ 주요내용	◦ 광양 희망도서관 - 위 치 : 광양읍 칠성리 431-6 외 9필지 - 사 업 량 : 연면적 2,132㎡(지상3층) - 사 업 비 : 10,000백만원 ․ 국비2,400, 시비4,600, 기부3,000 - 사업기간 : 2015. 11~ 2017. 12 - 현 공 정 : 25% ․ 지하, 지상1, 2층 콘크리트 타설 완료 ․ 지상 3층 거푸집 설치 공사 중 - 금후계획 ․ 골조공사 완료 : 2017. 4. ․ 내부공사(인테리어) : 2017. 9. ․ 마감공사(토목, 조경 등) : 2017.10. ◦ 광양 용강도서관 - 위 치 : 광양읍 용강리 865-6번지 - 사 업 량 : 연면적 1,286㎡(지상3층) - 사 업 비 : 3,900백만원(국비 1,600, 시비 2,300) - 사업기간 : 2016. 8 ~ 2017. 12 - 추진실적 ․ 2015. 11. : 타당성조사 및 기본계획용역 ․ 2017. 4. 6. : 도시계획 시설사업 실시계획 인가 ․ 2017. 4.11. : 전라남도 계약심사 - 금후계획 ․ 2017. 4.12. : 건축협의 및 계약 ․ 2017. 4.28. ~ 11.27 : 공사 착공 및 준공