정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	사회복지과	② 담당자 (전화번호)	과 장 송로종 주무관 이승희 (797- 3349)
③ 정책사업명	(2017-13) 중마동 권역 장애인종합복지관 건립
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상 예산사업	⑤ 사업기간	’17. 3. ~ ’19. 12.
⑥ 주요내용	◦ 추진배경 : 중마동권역 거주 장애인들의 장애인종합복지관 이용 불편 해소 및 맞춤형 복지서비스 제공 ◦ 위 치 : 광양시 마동 1212번지(제141호 근린공원) ◦ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2019. 12.(3년간) ◦ 사 업 비 : 5,833백만원(공사비 5,456 / 설계비․감리비 등 377) ◦ 사업규모 : 부지면적 19,986㎡, 연면적 2,285㎡(지상 2층) ◦ 주요시설 : 재활치료실, 체력단련실, 프로그램실, 주간보호센터 등 ◦ 추진상황 - 중마동 권역 장애인복지관 건립 검토 : ’15. 9. - 타당성 및 입지선정 용역 : ’16. 3. ~ ’16.11. - 중기지방재정계획 반영 : ’16. 12. - 공공시설 설치 승인 : ’17. 3. ◦ 향후 추진계획 - 지방재정 투자심사(자체 심사) : ’17. 8. - 2017년 제2회 추경 예산 확보(설계용역비 283백만원) : ’17. 9. - 설계 공모 : ’17.10. ~ ’18. 2. - 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’18. 3. ~ ’18. 9. - 공사 착공 및 준공 : ’18.10. ~ ’19. 12.