정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

택지조성과

② 담당자

(전화번호)

과  장 신흥식

주무관 양경수

(797-2848)

③ 정책사업명

(2017-24) 와우지구 도시개발사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상 예산사업

⑤사업기간

2014. 06. ∼ 2019. 12.

⑥ 주요내용

◦ 사업개요

- 위    치 : 중마동 와우마을 일원

- 면    적 : 636,550㎡ (192,556/3.3㎡)

- 사 업 비 : 1,079억원(공사비 650, 보상비 140, 기타 289)

- 사업기간 : 2014. 06. ∼ 2019. 12.

- 수용계획 : 3,703세대(10,002명)

- 시 행 자 : 광양시장(환지방식)

- 공 정 률 : 39.7%

◦ 사업의 필요성

- 낙후된 와우마을 일원을 쾌적한 주거단지로 조성하여,

인구유입과 지역 균형개발을 도모하기 위함

◦ 지금까지 추진실적

- '15. 10. 30. ~ : 체비지 매각 추진 (134필지 중 76필지 완료)

- '16. 11. 11. : 개발계획 및 실시계획 변경 용역 착수

- '17. 03. 10. : 개발계획 변경사항 추가 요청(LH→시)

- '17. 04.현재 : 토목공사 추진

◦ 앞으로 추진계획

- '17. 04. ~   : 토목공사 및 체비지(58필지) 매각 지속 추진

- '17. 04.     : 개발계획 및 실시계획 변경 신청(시→도)

- '19. 12.     : 공사 완료 및 환지처분

◦ 연도별 투자계획                             (단위:백만원)

재원별	총사업비	2016년까지	2017년	투자계획
				2018년	2019년 이후
체비지매각대금 (공기업특별회계)	107,955 (26,167)	26,167 (26,167)	10,060 (-)	35,245 (-)	36,483 (-)