정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

택지조성과

② 담당자

(전화번호)

과  장 신흥식

주무관 박성준

(797-3431)

③ 정책사업명

(2017-25) 광영․의암지구 도시개발사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상 예산사업

⑤ 사업기간

2012. 03. ∼ 2019. 04.

⑥ 주요내용

◦ 사업개요

- 위    치 : 옥곡면 신금리(의암), 광영동 일원

- 면    적 : 546,161㎡ (165,213/3.3㎡)

- 사 업 비 : 1,036억원(공사비 729, 보상비 196, 기타 111)

- 사업기간 : 2012. 03. ∼ 2019. 04.

- 수용계획 : 2,533세대(6,839명)

- 시 행 자 : 광양시장(혼용방식)

- 추진공정 : 총괄 35.2%

◦ 사업의 필요성

- 면‧동 지역의 동반성장을 통한 지역균형 발전 및 신금

일반산업단지 조성 등에 따른 유입인구 수용

◦ 지금까지 추진실적

- '16. 10. 10. ~ : 체비지 매각 추진(165필지 중 15필지 완료)

- '16. 10. 14.  : 광역상수도 임시관로 착수(1,922m)

- '17. 04.현재 : 토목공사 추진

◦ 앞으로 추진계획

- '17. 04.  ~ : 토목공사 및 체비지 매각(150필지) 지속 추진

- '17. 05.  ~ : 광역상수도 우회관로 개통(1,922m)

- '19. 04.    : 공사완료 및 환지처분

◦ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비	2016년까지	2017년	투자 계획
				2018년 이후
계 (공기업특별회계)	103,639 (29,273)	37,796 (29,273)	25,961	39,882
시 비	12,023	8,523	-	3,500
체비지매각	91,616	29,273	25,961	36,382