정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

하수도과

② 담당자

(전화번호)

과  장 전보현

주무관 김백석

(797-2836)

③ 정책사업명

(2017-32) 광양3단계 하수관로 정비사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상

⑤ 사업기간

2014. 8.~2019. 7.

⑥ 주요내용

◦ 사업개요

- 광양읍 일부 합류식 처리구역에 대한 분류식 관로매설을 통해 광양하수처리장 효율 개선

- 옥룡면 백운산 계곡에서 발생하는 오수처리로 광양만 수질 개선

◦ 추진실적 및 계획

- 2014.  8.  ̴ 2015. 12. : 기본 및 실시설계용역 시행

- 2015. 12. : 기술심의(道), 재원협의(영산강청) 등 행정절차 이행

- 2016.  4. : 1차분 공사 착공

- 2017.  1. : 1차분 공사 준공, 2차분 공사 착공

- 2019.  7. : 총괄 공사 준공

◦ 연도별 투자계획

	총 사업비	기투자	2017년	2018년	2019년이후
계	49,000	10,363	14,599	12,020	12,018
국 비	34,020	6,704	9,939	8,689	8,688
시 비	14,980	3,659	4,660	3,331	3,330