정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

하수도과

② 담당자

(전화번호)

과  장 전보현

주무관 홍운옥

(797-3488)

③ 정책사업명

(2017-33) 광영․태인분구 하수관로 정비사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상

⑤ 사업기간

2016.1.~2019.12.

⑥ 주요내용

◦ 사업개요

- 택지개발 시 설치한 기존 하수관로 노후화(28년)에 따른 하수관 파손, 불명수 유입 등으로 인한 싱크홀 발생 방지

- 배수설비 미정비로 생활하수의 우수관로 오접 및 가정 내

정화조 유출수 방류를 개선하여 처리장 처리효율 증대

◦ 추진실적 및 계획

- 2014.     ̴  2015.     : 기술진단 및 노후관로 정밀진단 실시

- 2015. 12.             : 국비사업 확정

- 2016.  4.  ̴ 2016. 12. : 실시설계 용역시행(토질, 측량)

- 2017.  2.             : 행정절차 이행 완료

- 2017.  4.  ̴ 2019. 12. : 공사추진

◦ 연도별 투자계획

	총 사업비	기투자	2017년	2018년	2019년이후
계	27,811	1,314	9,284	7,900	9,313
국 비	19,468	500	7,287	5,530	6,151
시 비	8,343	814	1,997	2,370	3,162