[2019-5, 환경과]

정책실명 공개과제 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마동저수지 생태공원 조성사업(2단계)
② 추진배경	1단계 사업과 연계하여 도심지 내 생태공원 조성을 통해 친수·여가 및 생태체험 공간을 제공
③ 사업개요	∙ 위 치 : 마동 504 외 마동유원지 일원 ∙ 사업내용 : 생태공원 조성 68,499㎡ - 생태탐방로, 관찰데크, 쉼터, 주차장조성, 등 ∙ 사 업 비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 325, 시비 4,175)
④ 사업부서	환경과		⑤ 담당자	환경5급 서경철 시설7급 안효상
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	17. 1. ~ 20. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사(도) 신청		‘15.12.17.	배연호 과장 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ ‘17년 지특 회계 예산 확보		‘16. 8.	박현수 과장 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ 실시설계용역 추진 계획		‘17. 4.28.	정현복 시장, 문동식 부시장, 윤춘보 국장, 박현수 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 마동저수지 생태공원 교통영향평가(변경) 용역 완료		‘18. 5. 9.	배연호 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 실시설계 경제성검토(VE)용역 완료		‘18. 7.11.	서경철 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 마동저수지 생태공원 환경영향평가(변경) 용역 완료		‘18. 8. 8.	서경철 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 실시설계용역 완료		‘19. 3.18.	서경철 과장 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 전라남도 계약심사(공사) 완료		‘19. 3.22.	서경철 과장 정형권 팀장, 안효상 주무관