[2020-4, 환경과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	마동저수지 생태공원 조성사업(2단계)
② 추진배경	1단계 사업과 연계하여 도심지 내 생태공원 조성을 통해 친수·여가 및 생태체험 공간을 제공
③ 사업개요	∙ 위 치 : 마동 504 외 마동유원지 일원 ∙ 사업내용 : 생태공원 조성 68,499㎡ - 생태탐방로, 관찰데크, 쉼터, 주차장조성, 등 ∙ 사 업 비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 325, 시비 4,175)
④ 사업부서	환경과		⑤ 담당자	환경5급 김재희 시설7급 안효상
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	17. 1. ~ 21. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사(도) 신청		‘15.12.17.	배연호 과장 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ ‘17년 지특 회계 예산 확보		‘16. 8.	박현수 과장 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ 실시설계용역 추진 계획		‘17. 4.28.	정현복 시장, 문동식 부시장, 윤춘보 국장, 박현수 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 마동저수지 생태공원 교통영향평가(변경) 용역 완료		‘18. 5. 9.	배연호 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 실시설계 경제성검토(VE)용역 완료		‘18. 7.11.	서경철 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 마동저수지 생태공원 환경영향평가(변경) 용역 완료		‘18. 8. 8.	서경철 과장 김재희 팀장, 정경태 주무관
○ 실시설계용역 완료		‘19. 3.18.	서경철 과장 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 전라남도 계약심사(공사) 완료		‘19. 3.22.	서경철 과장 정형권 팀장, 안효상 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 마동저수지 생태공원 조성사업 2단계 시행 계획	‘19. 4.10.	정현복 시장, 김명원 부시장, 장충세 국장, 김재희 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 도급공사 계약 체결 및 1차분 착공	‘19. 5.27.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 광양 도시계획시설(유원지 제1호) 사업 실시계획인가 고시	‘19. 6.20.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 통합건설사업관리용역 발주 계획	‘19.10. 1.	정현복 시장, 김명원 부시장, 장충세 국장, 김재희 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 전기공사 계약 체결 및 1차분 착공	‘19.11.12.	김명원 부시장, 장충세 국장, 김재희 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 옥곡천 2단계 외 1건 통합건설사업 관리용역 착수	‘19.12.18.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관