[2020-5, 환경과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	옥곡천 생태하천 복원사업(2단계)
② 추진배경	∙ 수질관리와 동식물 서식공간 조성을 통한 수생태계 건강성 회복 ∙ 1단계 사업과 연계하여 자연친화적 시민 휴식공간 제공
③ 사업개요	∙ 위 치 : 옥곡면 장동교 ~ 수어천 합류부 ∙ 사업내용 : 생태하천복원 L=2.0㎞ - 장동교, 가동보 재설치, 생태호안 및 생태하도조성, 생태탐방로조성 등 ∙ 사 업 비 : 34,189백만원(국비 16,769, 시비 17,420)
④ 사업부서	환경과		⑤ 담당자	환경5급 김재희 시설7급 안효상
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	17. 1. ~ 22. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 광양시 중기지방재정계획 반영		‘14.11.11.	배연호 과장, 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ 지방재정투자심사(중앙) 완료		‘17. 5.28.	배연호 과장, 박종우 팀장, 박광재 주무관
○ 옥곡천 생태하천 복원사업(2단계) 실시설계용역 추진 계획		‘17. 2. 1.	정현복 시장, 문동식 부시장, 윤춘보 국장, 박현수 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 실시설계 용역 착수		‘17. 4.28.	배연호 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 광양시 생태하천복원계획 수립		‘17.10.27.	배연호 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 소규모환경영향평가용역 착수		‘17.12.15.	배연호 과장, 김재희 팀장, 안효상 주무관
○ 공법선정위원회 개최		‘18. 3.16.	배연호 과장, 김재희 팀장, 김성일 주무관
○ 보상계획(1차) 열람 공고		‘18. 5. 3.	배연호 과장, 김재희 팀장, 김성일 주무관
○ 실시설계 경제성검토(VE) 및 문화재지표조사 용역 완료		‘18. 6.26.	서경철 과장, 김재희 팀장, 김성일 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 준공	‘19. 6.24.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 통합건설사업관리용역 발주 계획	‘19.10. 1.	정현복 시장, 김명원 부시장, 장충세 국장, 김재희 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 옥곡천 2단계 외 1건 통합건설사업관리용역 착수	‘19.12.18.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 옥곡천 생태하천복원사업 2단계(1차분) 계약 체결 및 착공	‘19.12.30.	서경철 과장, 정형권 팀장, 안효상 주무관
○ 1차 공사 보상계획 열람 공고	‘20. 3.13.	김재희 과장, 정형권 팀장, 조일권 주무관