[2020-9, 지역경제과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	금속가공 열처리산업 생태계 기반구축
② 추진배경	금속산업은 광양만권 특화산업으로 기반은 풍부하나, 단순 가공 위주이며 제품의 품질을 결정하는 열처리 관련기업의 부재 및 외주가공으로 인한 물류비 증가 등 타 시도대비 열처리 산업이 열악하여 산업 기반 확보가 절실함.
③ 사업개요	□ 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. □ 사 업 비 : 90억원(국비45, 도비15, 시비30) * 2020년도 사업비 : 25억(도비 25) □ 사업규모 : 부지면적 6,872㎡, 건축면적 1,741㎡, 지상1층 □ 사업내용 : 열처리지원센터 구축, 장비구축(9대), 기술개발 산업 육성을 통해 미래주력 산업 경쟁력강화 및 신시장 창출 □ 사업주체 : 전라남도, 광양시, (재)전남테크노파크 □ 운영기관 : (재)전남테크노파크
④ 사업부서	지역경제과		⑤ 담당자	행정5급 이재윤 행정7급 임정열
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간	2018.1.1.~2020.12.31.
<그간 주요 추진내용>
○ 뿌리산업 연구용역 실시 및 뿌리산업 특화단지 지정 신청		‘16. 3. 7. ∼ 9. 30.	이정희 투자유치과장
○ 2016 뿌리산업특화단지 지정 고시		‘16. 9. 30.	산업통상자원부 고시 제2016-179호
○ 투자심사(전라남도)		‘17. 3. 7.	이정희 투자유치과장
○ 지역특성화사업 적합 심의결정		‘17. 5. 25.	전남도 예산담당관-5374호
○ 2018년 본예산 편성		‘17. 12.	18억원
○ 금속가공 열처리산업 생태계 기반구축을 위한 전남도·광양시· 전남TP간 업무협약 체결		‘18. 3. 7.	이정희 투자유치담당관
○ 열처리센터 건립 부지매입 및 부기등기		‘18. 5.	전남테크노파크
○ 열처리센터 구축장비 수요조사		‘18. 6.~‘19. 1.	열처리기업 85개사
○ 열처리 장비구축 기업 설명회		‘19. 3.	열처리기업, 전문가 등 20명, 이재윤 지역경제과장
○ 열처리센터 건립 설계용역		‘19. 3. ~ ‘20. 1.	㈜에스지파트너스건축사
○ 열처리센터 건축 등 시공사 결정		‘20. 1.	전남테크노파크
○ 익신산단 입주계약 및 착공		‘20. 4.	이재윤 지역경제과장 이은경 기업지원팀장 정연재 주무관 전남테크노파크