[2020-12, 문화예술과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	폐산업시설 문화재생사업
② 추진배경	∙ 전남도립미술관과 연계한 복합문화공간 조성 필요 ∙ 전시․체험 등 조성으로 시민의 문화향유 기회 확대
③ 사업개요	∙ 위 치 : 광양시 인서리 251-4번지 외 13필지 ∙ 사업기간 : 2018. ~ 2020. ∙ 사업내용 : 전시실, 체험실, 편의시설 등 ∙ 사업규모 : 부지면적 3,165㎡ / 연면적 902㎡ ∙ 사 업 비 : 76억원[국비 18, 시비 18, 부지매입비 40(시비)]
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자		문화예술과장 김복덕 행정 7급 오재환
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간		2018 ~ 2020
<그간 주요 추진내용>
○ 폐산업시설 문화재생사업 확정		2016.10.10.		김문수 과장 이기섭 팀장 이경언 주무관
○ 공유재산관리계획 시의회 의결		2017.10.13.		이삼식 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 시비 18억원 예산 확보 (17년 2회 추경)		2017.11.21.		이삼식 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 국비 18억원 예산 확보 (18년 본예산)		2017.12.26.		이삼식 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 지방재정투자심사		2018.2.26.		장형곤 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 토지 및 건물 매입비 38억원 예산 확보 (18년 1회 추경)		2018.3.16.		장형곤 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 손실보상금 결정 및 보상협의		2018.5.24.		장형곤 과장 서영동 팀장 박지성 주무관
○ 전시물 제작․설치 및 건축설계용역 업체 선정 및 계약		2018.11.17.		장형곤 과장 서희숙 팀장 정민기 주무관
○ 도시계획시설(문화시설, 도로) 실시계획인가 고시		2019.1.24.		장형곤 과장 양경순 팀장 정민기 주무관
○ 토지수용재결 신청		2019.2.26.		장형곤 과장 양경순 팀장 정민기 주무관
○ 토지 등 보상완료(공탁)		2019.6.14.		장형곤 과장 양경순 팀장 정민기 주무관
○ 건축업체 입찰 및 계약		2019. 11.~12.		김복덕 과장 양경순 팀장 오재환 주무관
○ 건축 리모델링 공사 착공		2019.12.9.		김복덕 과장 양경순 팀장 오재환 주무관
○ 건축허가 완료		2020.1.6.		김복덕 과장 양경순 팀장 오재환 주무관