[2020-21, 도시재생과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	덕례지구 명품길 조성사업
② 추진배경	∘ LF스퀘어~서천~도립미술관~유당공원 구간에 명품길 조성으로 광양읍권 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모
③ 사업개요	∘ 위 치 : 광양시 광양읍 덕례리 인덕저수지 ~ 인동리 유당공원 구간 ∘ 사 업 량 : L=3.34km, B=7-10m ∘ 사 업 비 : 12,000백만원(용역비 600, 보상비 7,000, 공사비 등 4,400)
④ 사업부서	도시재생과		⑤ 담당자		시설9급 김보은
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간		2017. ~ 2021.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 등 착수(도시과-8873호)		17. 6. 14.		정은태 과장 권회상 팀장 박영선 주무관
○ 덕례지구 명품길 조성사업 연석회의		17. 6. 21.		정은태 과장 권회상 팀장 박영선 주무관
○ T/F팀 구성(도시과-10185호)		17. 7. 5.		오우식 국장 정은태 과장 권회상 팀장 박영선 주무관
○ T/F팀 실무회의 개최(도시과-11228호)		17. 7. 19.		정은태 과장 권회상 팀장 최형욱 주무관
○ 관계부서 연석회의 개최(도시과-12148호)		17. 8. 1.		정현복 시장 신현숙 부시장 오우식 국장 정은태 과장 권회상 팀장 최형욱 주무관
○ 자문위원회 구성(도시과-12867호)		17. 8. 24.		오우식 국장 정은태 과장 권회상 팀장 최형욱 주무관
○ 자문위원회 개최(1차)(도시과-14014호) ○ 자문위원회 개최(2차)(도시과-17874호)		17. 8. 30. 17. 11. 9.		오우식 국장 정은태 과장 권회상 팀장 최형욱 주무관
○ T/F팀 실무회의 개최(2차)(도시과-7817호)		18. 6. 29.		이규광 과장 문성기 팀장 장두이 주무관
○ 자문위원회 개최(3차)(도시과-8624호)		18. 7. 9.		문병한 국장 이규광 과장 문성기 팀장 장두이 주무관
○ 수목 설문조사 (도시과-9798, 10166, 10311호)		18. 7. 27. ~ 8. 14.		이규광 과장 문성기 팀장 장두이 주무관
○ 수목 선정위원회 개최 및 수목선정 (도시과-12297호)		18. 9. 17.		정현복 시장 방옥길 부시장문병한 국장 이규광 과장 문성기 팀장 장두이 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 등 착수 (도시과-15215, 15174, 15175, 15171호)		18. 11. 20.		방옥길 부시장 문병한 국장 이규광 과장 문성기 팀장 장두이 주무관
○ 실시설계용역 등 추진		19. 12 .31.		권회상 과장 박옥병 팀장 장두이 주무관