[2020-25, 건축과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	광양 공공실버주택 건립사업
② 추진배경	○ 65세 이상 홀몸노인 및 저소득 고령자의 주거안정 불안 해소 ○ 고령자 맞춤 설계와 다양한 프로그램 운영으로 보건·복지·문화여건 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 광양읍 칠성리 19번지 외 2필지(2,152㎡) ○ 사업규모 : 지하1층/지상12층, 연면적 8,661㎡ - 복 지 관 : 1,224㎡(지상1~2층) - 실버주택 : 150세대(17.35㎡-80, 25.08㎡-70) ○ 총사업비 : 18,842백만원 - 건설비 15,849, 설계 525, 감리 1,150, 용지비 1,318 - 국비 15,481(복지관 4,000, 주택 11,481), 시비 3,361
④ 사업부서	건축과		⑤ 담당자	시설5급 이은관 시설7급 장동연
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	2017 ~ 2020
<그간 주요 추진내용>
○ 광양 공공실버주택 신축 공모사업 추진 수립		16. 5. 4.	정현복 시장 신태욱 부시장 김석환 국장 노상철 과장 김순열 팀장
○ 광양 공공실버주택 사업시행방식 선정		17. 4.13.	정현복 시장 문동식 부시장 이형철 국장 노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 지방재정 투자심사 요청		17. 4.26.	노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 광양 공공실버주택 건축설계공모 추진계획 수립		17. 5. 4.	정현복 시장 문동식 부시장 이형철 국장 노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 광양 공공실버주택 건립사업 건축설계 용역비 집행		17. 7.28.	정현복 시장 신현숙 부시장 오우식 국장 노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 공공주택건설사업계획 승인 신청		17.10.23.	노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 광양 공공실버주택 손실보상 계획 수립		18. 1.29.	정현복 시장 신현숙 부시장 문병한 국장 노상철 과장 이은관 팀장 정인두 주무관
○ 설계의 경제성 등 검토(설계 VE) 용역 추진계획 수립		18. 2.13.	문병한 국장 노상철 과장 이은관 팀장 정인두 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 광양 공공실버주택 건립사업 건축설계 용역비 집행	18. 6. 5.	정현복 시장 신현숙 부시장 문병한 국장 노상철 과장 이은관 팀장 정인두 주무관
○ 감독권한대행 등 건설사업관리용역 추진계획 수립	18. 9.14.	정현복 시장 방옥길 부시장 문병한 국장 노상철 과장 이은관 팀장 문봉삼 주무관
○ 광양 공공실버주택 건축공사 계약심사	18. 9.17.	노상철 과장 이은관 팀장 문봉삼 주무관
○ 감독권한대행 등 건설사업관리용역 계약심사	18.10.19.	노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 광양 공공실버주택 공사시행 계획수립	18.12. 2.	정현복 시장 방옥길 부시장 문병한 국장 노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 광양 공공실버주택 건립사업 공사계약 체결	18.12.31.	노상철 과장 이은관 팀장 장동연 주무관
○ 공공주택건설사업계획 변경승인 신청	19. 2. 8.	김필식 과장 김순열 팀장 장동연 주무관