[2020-35, 택지과]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	중동분구 노후 하수관로 정비사업
② 추진배경	노후(25년 경과)된 기존 하수관로 부식, 파손에 따른 지반침하 및 침수 예방 목적
③ 사업개요	위 치 : 광양시 중마동 일원 사업량 : 우수관로 L=25.9㎞, 오수관로 L=7.6㎞ 등 총 사업비 : 35,659백만원 (국 17,219 시 18,440)
④ 사업부서	하수도과		⑤ 담당자	시설5급 탁길신 시설9급 김성준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	2018.10.~2021.4.
<그간 주요 추진내용>
○ 노후관로 정밀조사 용역 추진		2015. 12.	정현복 시장 신태욱 부시장 김점현 국장 황형구 과장 강봉구 팀장 홍운옥 주무관
○ 중동분구 노후 하수관로 정비사업 신규 사업 반영		2017. 1.	정현복 시장 신현숙 부시장 김점현 소장 박준승 과장 강봉구 팀장 홍운옥 주무관
○ 중동분구 노후 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 착수		2017. 5.	정현복 시장 신현숙 부시장 이병철 국장 전보현 과장 박성완 팀장 홍운옥 주무관
○ 설계경제성 검토(VE)용역 착수 ○ 설계자문 및 재원협의 요청		2018. 3.	정현복 시장 신현숙 부시장 박준승 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 안효상 주무관
○ 도급공사 총괄(1차분) 계약 및 착공(7,943백만원)		2018. 10.	정현복 시장 신현숙 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 안효상 주무관
○ 건설사업관리용역 총괄(1차분)계약 및 착수(94백만원)		2018. 11.	정현복 시장 신현숙 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 안효상 주무관

○ 관로내부조사용역 총괄(1차분) 계약 및 착수(26백만원)	2019. 2.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 폐기물 처리 용역 총괄(1차분) 계약 및 착수(738백만원)	2019. 1.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 건설사업관리용역 총괄(2차분)계약 및 착수(787백만원)	2019. 1.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 폐기물 처리 용역 총괄(2차분) 계약 및 착수(318백만원)	2019. 6.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ 도급공사 2차분 계약 및 착공 (6,239백만원)	2019. 6.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ 폐기물(폐합성수지) 처리 용역 착수(19백만원)	2019. 8.	정현복 시장 김명원 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ GIS DB구축 용역 착수(290백만원)	2019. 10.	정현복 시장 김명원 부시장 김형찬 소장 탁길신 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ 관로내부조사용역 2차분 계약 및 착수(53백만원)	2019. 12.	정현복 시장 김명원 부시장 김형찬 소장 탁길신 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ 폐기물 처리 용역 총괄(1차분) 계약 및 착수(716백만원)	2020. 2.	정현복 시장 김명원 부시장 김형찬 소장 탁길신 과장 박성완 팀장 김성준 주무관
○ 도급공사 3차분 계약 및 착공 (6,877백만원)	2020. 3.	정현복 시장 김명원 부시장 김형찬 소장 탁길신 과장 박성완 팀장 김성준 주무관