[2020-36, 하수도과]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	봉강 하봉·당저 농어촌 마을하수도 정비사업 추진
② 추진배경	하수도 정비를 통한 성불계곡 하천수질 및 주민생활환경 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 광양시 봉강면 봉당리 일원 ○ 사업량 : 하수관로(D80~200) L=2.6㎞, 하수처리시설 55㎥/일, 맨홀펌프장 2개소, 배수설비 81가구 ○ 사업비 : 3,425백만원(국비 2,398, 도비 95, 시비 932)
④ 사업부서	하수도과		⑤ 담당자	시설5급 탁길신 시설7급 곽기백
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산사업		⑦ 사업기간	2019. 4. ~ 2021. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 추진		19. 4.	정현복 시장 방옥길 부시장 김영관 소장 신흥식 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 전라남도 설계자문 완료		20. 3. 4.	탁길신 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 국비 재원협의 완료(영산강유역환경청)		20. 4. 10.	탁길신 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 전라남도 계약심사 완료		20. 4. 24.	탁길신 과장 박성완 팀장 이돈필 주무관
○ 총괄 및 1차분 입찰공고		20. 5. 8.	탁길신 과장 박성완 팀장 곽기백 주무관