[2020-40, 산단과]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	광양 대근지구 도시개발사업
② 추진배경	중마 생활권의 주거, 문화, 교육, 유통 등을 위한 체계적인 용지 개발과 항만물류 및 정보산업 유치를 통한 광양만권 핵심거점 마련을 위함
③ 사업개요	◦사업위치: 광양시 도이동 산10번지 일원(389필지) ◦개발면적: A=278,782㎡(≒84,332평) ◦총사업비: 395억원(공사비 210, 보상비 86, 설계비 31, 기타 68) ◦사업기간: 2018. 1. ~ 2023. 12.(6년간)
④ 사업부서	산단과		⑤ 담당자	이돈국
⑥ 선정기준	10억이상 예산사업		⑦ 사업기간	2018. 1. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
◦지방재정투융자심사 승인		‘17. 11. 20.	탁길신 과장 원용해 팀장 박주현 주무관
◦대근지구 도시개발사업 조사 및 설계 용역 착수		‘18. 7. 23.	심우신 과장 최형도 주무관
◦지형현황측량 준공		‘19. 1. 29	심우신 과장 최형도 주무관
◦신항만건설기본계획 변경 - 신항만건설예정지역 제척		‘19. 8. 2.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦토질조사 준공		‘19. 12. 12.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦문화재지표조사 준공		‘19. 12. 12.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦대근지구 도시개발사업 주민설명회 개최		‘19. 11. 7.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦지장물조사 등 완료		‘20. 2. 27.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦대근지구 도시개발사업 전략 환경영향평가(초안)주민설명회		‘20. 5.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦교통영향평가 추진(95%)		‘20. 5.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관
◦기본 및 실시설계 추진중(85%)		‘20. 5.	신흥식 과장 정봉민 팀장 이돈국 주무관