【 붙임 】

옥곡면사무소 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 이문혁, 061-797-2275

일반 현황	소 재 지	광양시 옥곡면 신금리 1380-2일원
	인구 수	4,683(25.2말 기준)
	공무원 수	15명/16명	현원/정원
	재정자립도	22.9%(2023년)

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계											709.97㎡		지상 2층
	옥곡면사무소	1990.11.15.										709.97㎡		지상 2층				신축후 철거예정
	청사신축 필요성			노후되고 협소한 기존 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2019.11.~2026.6.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(일반경쟁)
	추정(예정)가격			6,637,000,000원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2026. 6.		3,466㎡					1,432.69㎡			지상 2층
	옥곡면사무소		2026. 6.		3,466㎡					1,432.69㎡			지상 2층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	6,637					6,637
	당해연도 이전	579					579
	당해연도(H)	1,571					1,571
	H+1(2026)	4,487					4,487
	총사업비(6,637백만원)					비고
	1) 토지매입비		350
	2) 설계비		229
	3) 감리비 등		430			인증수수료,시설부담금등 포함
	4) 공사비		5,628

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	투자심사 (재심사)	2019. 10. 2024. 10.		전남도
	중기재정계획	2019. 10. 2024. 10.		자체
	타당성 조사	해당없음
	설계	2024. 6.		자체
	착공	2025. 6.		자체
	준공	2026. 6.		자체