	특수공시 대상사업

(단위: 천원)

연번	세부사업명	2021년도 예산액	비 고
1	광양읍 주민자치센터 건립	4,500,000	총무과
2	광양 선샤인 해변공원 조성사업	5,931,177	관광과
3	(가칭) 중마수영장 건립공사	10,686,515	체육과
4	광양시 지능형교통체계(ITS) 구축사업	5,270,997	교통과
5	광양 행복타운 통합공공임대주택 건립사업	3,995,000	건축과

1		광양읍 주민자치센터 건립

			사업목적
	❍ 주민의 편의 및 복지증진에 기여하는 주민 중심의 공간 조성 ❍ 주민자치 기능 수행 및 활성화를 도모할 수 있는 커뮤니티 공간 마련

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 11. ∼ 2025. 6.

❍ 위    치 : 광양시 광양읍 칠성리 126-3번지 일원

❍ 총사업비 : 19,428백만원(시비)

❍ 사업내용 : 주민자치센터 건립 1동(지상 4층, 연면적 4,200㎡)

■ 추진실적 및 금후 추진계획

❍ 공유재산 심의	: 2020.  8.

❍ 공공시설물 설치계획(안) 의회 승인	: 2020.  9.

❍ 지방재정 투자심사(市)	: 2020. 11.

❍ 토지 등 보상 추진	: 2020. 11.

❍ 건립부지 건축물 철거공사 완료	: 2022. 11.

❍ 설계 공모 및 실시설계 용역	: 2022. 11. ∼ 2024. 2.

❍ 건립 공사 추진	: 2024.  3. ∼ 2025. 6.

❍ 주민자치센터 개소	: 2025.  7.

■ 사업효과(기대효과)

❍ 지역 주민의 참여를 통해 자치 의식과 공동체 의식을 형성하고
실천할 수 있는 주민자치 활성화 기여

담당부서： 총무과 시정팀 061-797-2240

2		광양 선샤인 해변공원 조성사업

			사업목적
	❍ 이순신대교 주변 해변의 친수공간을 시 대표 관광, 문화, 여가 활용 관광 명소로 조성하여 관광객 유치 및 지역 경제 활성화 기여

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. ∼ 2024.

❍ 위    치 : 광양시 길호대교∼금호대교 수변 일원

❍ 총사업비 : 32,000백만원

❍ 사업내용 : 야간경관조명, 달빛해변 조성, 달빛광장 조성

■ 추진실적 및 금후 추진계획

❍ 야간 경관조명 설치                     : 2019. 12. ∼ 2022. 10.

❍ 달빛해변 조성

- 마동IC 교각 변위에 따른 정밀안전진단 용역  : 2022.  5. ∼ 10.

- 상부 조경 및 조명시설 등 전체공사 완료 : 2022. 11. ∼ 2023. 6.

❍ 달빛광장 조성

- 사업계획 변경 등 대응방안 마련         : 2022. 10. ∼

■ 사업효과(기대효과)

❍ 광양의 랜드마크인 이순신대교를 중심으로 광양제철소, 중마·금호         해상공원, 광양항 해양공원, 와우생태공원 등 광양을 대표하는 주요        관광콘텐츠의 선적인 연계를 통한 해양 관광 인프라 구축

담당부서： 관광과 관광시설팀 061-797-3363

3		(가칭) 중마수영장 건립공사

			사업목적
	❍ 실내 수영장 신규 건립으로 지속적으로 증가하고 있는 수영 인구에 대응하고 쾌적한 생활체육공간 제공으로 시민들이 건강증진에 기여하고자 함.

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 12. 24. ～ 2022. 7. 31.

❍ 위    치 : 성황도이로 66-16번지

❍ 총사업비 : 22,203백만원 (국비 6,000, 시비 16,203)

❍ 사업내용 : 실내 수영장 건립 1동 (A=5,906.34㎡ / 지하1층, 지상2층)

- 경영풀(50M×10레인), 유아풀, 관람석, 부대시설 등

■ 추진실적 및 금후 추진계획

❍ 사전행정절차 및 설계 용역 완료   : 2020. 11.

❍ 공사 추진 및 준공                : 2020. 12. 24. ～ 2022. 7. 31.

❍ 내부 시설물 보강 공사 추진       : 2022. 8. ~ 11.

- 내부 인테리어공사, 사인물 설치, 운영물품 구입 등

■ 사업효과(기대효과)

❍ 성황스포츠센터 다목적체육관과 연계하여 다양한 생활체육프로그램 제공으로 생활체육 활성화에 기여

❍ 시민들의 건강 및 여가활동 증진에 기여

❍ 전지훈련팀 유치 등으로 지역경제 활성화에 기여

담당부서： 체육과 체육시설팀 061-797-2416

4		광양시 지능형교통체계(ITS) 구축사업

			사업목적
	❍ 주요 교차로에 첨단 정보통신 기술을 이용한 실시간 교통정보 수집 및 빅데이터 분석으로 최적화된 교통신호 운영 도모 ❍ 시민에게 교통정보 제공을 확대함으로써 통행시간 절감 및 관내 교통류를 원활하게 처리

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. ～ 2022. 12.

❍ 위    치 : 광양시 일원(관내 주요 교차로 262개소)

❍ 총사업비 : 170억원(국비 102, 시비 68)

❍ 사업내용 : 지능형교통체계(ITS) 구축

■ 추진실적 및 금후 추진계획

❍ 지능형교통체계 구축 기본설계 용역 계약 : 2021.  1.

❍ 지능형교통체계 구축 사업관리 용역 계약 : 2021.  4.

❍ 지능형교통체계 구축 용역 계약          : 2021. 12.

❍ 지능형교통체계 구축 용역 준공          : 2022. 12.

❍ 지능형교통체계 운영 및 유지관리        : 2023.  1. ～

■ 사업효과(기대효과)

❍ 관내 교통정보 수집하여 고속도로 및 국도, 타 지자체 정보 연계를 통하여 교통정보를 제공함으로써 도로 이용 효율 극대화 및 이용자 만족도 향상

담당부서： 교통과 교통시설팀 061-797-2867

5		광양 행복타운 통합공공임대주택 건립사업

			사업목적
	❍ 청년층에게 시세보다 저렴하면서 창의적이고 우수한 디자인의 공공임대주택 건립․공급하여 청년층 주거비 부담경감 및 아이 양육하기 좋은 도시 정주기반 조성

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6. ～ 2025. 12.

❍ 위    치 : 광양시 광양읍 칠성리 174-11번지 일원

❍ 총사업비 : 329억원(국비 98, 기금융자 102, 시비 129)

❍ 사업내용 : 주택 110호(전세대 59㎡), 부대 및 복리시설 설치

■ 추진실적 및 금후 추진계획

❍ 행복주택 후보지선정(LH시행)                 : 2018. 11.

❍ 행복주택 후보지선정(위치변경, 시직영)        : 2020. 6.

❍ 토지보상계획 수립 및 보상 협의              : 2021. 1. ～ 현재

❍ 사업유형 변경 국토부 협의(행복 →통합공공)   : 2022. 4.

❍ 건축설계용역 계약심사(전라남도)              : 2022. 6.

❍ 투자심사 면제협의, 건축설계 공모작품 심사    : 2022. 11.

❍ 전라남도 건축․경관위원회 심의                : 2022. 11.

❍ 공공주택건설사업계획 승인                    : 2022. 12.

❍ 실시설계 및 계약심사, 기술심사, 구조심의 등   : 2023. 1.～8.

❍ 공사계약 및 사업 완료                     : 2023. 10. ～ 2025. 12.

■ 사업효과(기대효과)

❍ 청년층이 선호하는 주거공간이 큰 평형의 주택 적용하여 인구 유입 및 지역경제 활성화 기여

❍ 우리시 역점 추진 사항인 “아이 양육하기 좋은 도시” 만들기 일환으로 청년 정책 실현

담당부서： 건축과 공동주택허가팀 061-797-2875